CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO ADITIVO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

O prazo de entrega e instalação total dos equipamentos será dilatado em 90(noventa) dias, contados de 10/03/2018. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO SUPORTE LEGAL

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do Contrato TRE-GO nº 52/2017, que não contrariem as disposições do presente Termo Aditivo, remanescem ratificadas.

CLÁUSULA QUINTA- DA PUBLICIDADE

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

   Diretor-Geral do TRE/GO

Senhor Valmor Fernandes Rosa Filho
TELTEX TECNOLOGIA LTDA

TESTEMUNHAS:
1)____________________________________________CPF______________________
2)____________________________________________CPF______________________